참고	재난안전통신망 사업 개요

□ 개  요

○ (사업목적) 소방․경찰 등 현장기관의 통합적 재난대응 지원, 기존 노후 통신망 교체 및 개별적 중복투자 해소를 위하여 단일망 구축 추진

○ (사업계획) ’15~’20년까지 단계적으로 재난안전통신망 구축

* 총사업비 : 19,611억원(구축비 9,688억원, 10년간 운영비 9,923억원)

* 사업내용 : 운영센터 2개소, 기지국 15,447식, 단말기 24만대 보급 등

준비단계 (‘14~’15)		시범사업 (’15∼’16년)		본사업
				1단계(’18년)	2단계(’19년)	3단계(’20년)
정보화전략계획 (ISP) 수립		평창 동계 올림픽 지역 평창, 강릉, 정선		중부권 5개 시도 강원, 대전, 세종 충남, 충북	남부권 9개 시도 부산, 대구, 광주, 울산, 전북, 전남, 경북, 경남, 제주	수도권 3개 시도 서울, 경기, 인천

	< 그간 추진경과 >
◇ 재난안전통신망 구축방향 확정(’14.5.27) 및 세부 추진계획 수립(15.3.31) * PS-LTE 기술방식 선정(’14.7.31), 주파수 배정(’14.12.10), ISP 수립(‘14.10～’15.3월) ◇ 시범사업 추진(‘15.11～’16.6월, 343억원) * 운영센터 1개소, 기지국 220개소, 단말기 2,496대 등 ◇ 민관합동 검증*(’16.7~10월) 이후 기재부 사업계획 검토중(’16.10월~, KDI 용역) * 검증결과 사업계획 보완(사업비 1조 8,953 → 1조 9,611억원, 기지국 11,693 → 15,447개소 등)

□ 기대 효과

○ 외산업체 종속에서 벗어나고, 국내 ICT 산업 생태계 조성 가능

- PS-LTE관련 시스템 개발 등으로 인해 국내․외 신규 시장 창출

○ 재난관리체계가 상황관리 위주에서 현장대응 중심으로 전환 가능

□ 추진 계획

○ 기재부(KDI 포함)의 「사업계획 적정성 재검토」 조기 완료토록 대응

* 총사업비는 미확정이나 ‘18년 예산에 1단계 구축비 1,217억원 반영예정

○ 평창 동계올림픽의 안전한 개최(‘18.2.9)를 위한 재난망 보강 추진

	< 보강사업 계획 >
◇ 사 업 비 : 87억원 / 사업기간 : 계약일로부터 180일* * 구축(~‘17.12월), 통신망 지원(~’18.3월) ◇ 사업내용 : 평창・강릉・정선 음영지역 기지국 보강(6억원*) * 기지국 32식, 중계기 6식 올림픽 선수단 수송로(인천공항~강원) 상용망 연동(81억원)